- 서귀포 감귤 융복합산업지구 조성사업 -

감귤 테마거리공간 조성사업 과업지시서

2017. 2

1		과업개요

1. 과업명: 감귤 테마거리공간 조성사업

2. 과업목적

□ 6차산업 감귤 허브센터가 구축됨에 따라, 이 일대를 중심으로 감귤테마를 입힌 환경조성이 필요함

□ 이를 통해, 관광객들에게는 볼거리 및 즐길거리를 제공함으로써 만족도를 높이고, 허브센터가 명소화 됨으로써 센터방문 활성화 및 지역주민 소득창출에 긍정적인 영향을 제공하고자 함

3. 과업기간 : 계약체결일로부터 ~ 2017년 9월 30일 까지

4. 과업예산 : 금90,000,000원(금구천만원/VAT포함)

5. 과업범위 : 감귤 융복합 6차산업지구 허브센터 일대

(센터주소 : 서귀포시 하효동 967-1번지)

6. 과업방향 : 6차산업의 정체성이 부각되고, 센터가 명소화 될 수 있는 감귤 테마거리 및 공간조성

7. 과업내용

□ 감귤 6차산업지구의 대표성을 살릴 수 있는 테마거리 및 공간 디자인 컨셉 도출

□ 문화재자원(쇠소깍 일대) 경관과 조화 될 수 있는 디자인 컨셉 테마거리공간 구축을 통해 지속성 있는 유지 및 관리방안 제시

□ 관광객들에게는 볼거리와 즐길거리를 제공함으로써 만족도를 높일 수 있고, 주민들에게는 소득창출의 효과를 낼 수 있는 감귤테마거리 공간 조성

2		과업내용

□ 감귤 테마거리공간 조성사업 추진전략

□ 관광객들에게는 다양한 볼거리 및 즐길거리를 제공함으로써 만족도 제고

□ 감귤 허브센터 일대 테마거리공간 조성을 통한 핵심 명소화로써의 역할 기대

□ 따라서, 관광객들에게 센터방문을 유도함으로써 센터운영 활성화를 통한 지역주민 소득창출 증대

□ 감귤 테마거리공간 조성 계획

□ 감귤 테마거리공간 정의

테마거리공간	⇒	감귤 테마거리공간
어떤 특정 한 주제를 정해 독특하게 꾸며, 사람들의 관심을 이끄는 길거리 혹은 그러한 공간		감귤을 테마로하여 6차산업 허브센터를 중심으로 조성된 매력적인 거리 및 공간

□ 감귤 테마거리공간 기능과 역할

- 관광객들에게 볼거리를 제공함으로써 만족도 제고

- 지역주민소득창출 명소로의 기능

- 감귤 융복합 이벤트 및 체험프로그램 시연 플랫폼(장소)으로써의 역할

□ 감귤 테마거리공간 범위

- 공간적 범위(안)

	• 테마거리 범위 : 센터부지일대를 중심으로 감귤 테마거리 조성(센터위치 : 서귀포시 하효동 967-1) • 범위설정 방안 : 테마거리 범위를 포함한 관련 세부 설치 내용에 대한 사항은 마을주민과 전문가들과의 현장평가 및 협의를 통한 범위설정 필요

- 법적검토 범위  및 테마거리 공간구상(안)

‧ 주요조성물 : 조형물(90%), 안내판(5%), 기타(5%) 금액비중

※ 구체적인 설치물 내용, 개수 등은 용역시행 시 공사와 협의하여 조정가능

□ 시간적 범위 : 2017년 3월 ~ 9월 (※실제일정은 변동가능)

□ 조성내용(안)

- 허브센터의 명소화와 감귤 6차산업의 대표성(정체성)을 나타낼 수 있는 설치물 제작(포토존, 조형물 등)

- 테마스토리를 활용한 공간 디자인(센터 일대, 바닥 공간 등)

- 이 외에 주민 개선사항을 반영한 센터일대 환경조성

□ 과업 추진방향

- 감귤 융복합 허브센터 일대를 중심으로 명소화 될 수 있는 테마거리공간 조성

- 문화재 자원(쇠소깍 일대) 경관과 조화 될 수 있는 디자인 컨셉도출

- 마을주민의견수렴 및 지속적인 협의를 통한 과업진행

- 다양한 분야 전문가 의견반영을 통한 감귤 테마거리공간 조성

□ 과업 세부내용

구 분	내 용
기본구상 및 테마거리 공간 조성계획수립	• 감귤 6차산업지구 대표성을 살릴 수 있는 테마거리공간 디자인 컨셉 도출 - 지역의 자연, 역사, 문화자산을 바탕으로 한 스토리 공간 구성 - 감귤 테마거리공간 조성범위 내 환경조성 컨셉 자유롭게 제안 - 주변경관과 어우러지는 창의적이고, 예술적인 디자인 컨셉 도출 • 관광객 수용태세 개선을 위한 공간조성 - 관광객 입장에서 필요한 환경조성(ex. 벤치, 센터 일대 휴식공간조성 등) • 감귤 융복합 이벤트 및 행사에 활용 할 수 있는 사업방향 제안 등 - 테마거리공간을 활용한 이벤트 컨셉, 연계 할 수 있는 공간 구성 제시 등
설계도면 제출 및 문화재 관련 협의	• 확정된 디자인 컨셉을 적용한 설계도면 작성 - 감귤 테마거리공간 조감도 제시(거의 실시설계 수준이여야함) • 문화재 관련 부서 협조 - 확정된 디자인 컨셉 및 설계도면을 바탕으로 서귀포시 문화재 관련 부서(서귀포시 문화예술과, 문화재청 등)와 협의 필요
실시설계	• 설치물 조성 실시 - 문화재 심의 및 관련 부서와의 협의를 통해 확정된 시안으로, 실시설계 진행
기타조사	• 이외에 테마거리조성에 필요한 기초 자료조사 등 - 토지이용 및 가로환경, 조경, 식재분야, 시설특성 등 일대 환경조사

❍ 과업 추진절차(안)

감귤 테마거리조성 및 디자인 컨셉 도출	⇛	감귤 테마거리조성 디자인 컨셉 확정	⇛	감귤 테마거리 조성실시
허브센터의 명소화 및 감귤 6차산업 대표성을 나타낼 수 있는 디자인 컨셉 도출 감귤 융복합 이벤트 및 행사에 활용 할 수 있는 사업방향 제안 마을주민 의견수렴을 반영한 컨셉구성 등		확정된 디자인 컨셉에 따른 조감도 및 설계도 제출 본 조감도 및 설계도를 바탕으로 서귀포시 문화재 담당부서와 협의 필요 테마거리 공간 조성을 위한 정비 등		감귤 테마거리 공간 조성 설치물 작업 시행

❍ 과업 추진일정(안)

구 분	3월		4월	5월	6월	7월	8월	9월
용역 계약체결
용역착수 및 과업 기본구상 (감귤 테마거리 조성 및 디자인컨셉 도출)
디자인 컨셉 확정 따른 조감도 제출 및 문화재 검토
감귤 테마거리 공간조성 및 설치물 설치작업 시행 (최종보고회 진행)
※ 세부 일정은 제주관광공사와 협의를 통한 조정 가능함

3		과업 지침

□ 과업 세부지침

□ 본 과업지시서는 ‘감귤 테마거리공간 조성사업’ 용역을 원활하게 수행하기 위해 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 본 과업지시서에 의하여 수행하여야 함

□ 본 과업진행에 필요한 법규검토, 문화재 심의 및 전반적인 과업과 관련된 주요 협의사항은 우리공사와 협의하여 진행하여야 함

□ 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이나 과업내용 변경이 필요할 경우에는 제주관광공사와 협의하여 진행해야 함

□ 본 과업은 계약체결 후 10일 이내에 과업이 착수되어야 하며, 과업수행계획서 등 제반서류를 제출하여야 함

□ 과업 수행 시, 세부 추진일정 및 조사계획에 대해서는 사전에 발주처와 긴밀한 협의를 통해 수행하도록 함

□ 본 과업의 수행도중 과업의 변동사유 발생 등 여건변동 및 추가사항 등에 대하여는 지방계약법 및 행정자치부 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에 의거하여 처리해야 함

□ 본 과업을 수행한 후 모든 지출증빙을 첨부한 정산서 1부를 제출 하여야 함

□ 본 과업에서 산출되는 모든 결과물의 소유권은 제주관광공사와 서귀포시로 귀속되며, 과업수행자는 저작권 및 사용권을 주장할 수 없음

□ 과업수행자는 모든 과정에서 제반 관련법규의 준수의 의무를 가짐

□ 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 관계법령, 규정, 지침등에 의거하여 제주관광공사와 협의하여야 함

□ 보안대책

□ 과업수행자는 과업의 착수 후 7일 이내에 용역기관 대표자와 참여할 인력의 상세한 인사기록과 보안각서를 제출하여야 한다.

□ 본 과업에 대한 모든 서류, 자료 등은 과업에 관련되지 않은 목적으로 사용할 수 없으며, 사전 승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여 할 수 없다.

□ 용역 참여인력 변경 시에는 인계인수를 철저히 하여 과업내용의 유출을 방지하도록 하여야 한다.

□ 과업과 관련하여 취득한 비밀사항을 외부에 공개 또는 제공하지 아니하며, 이로 인해 문제가 발생할 경우 모든 책임을 과업수행자가 부담하고, 그로 인한 공사의 물적, 심적 피해에 대하여 공사가 정하는 바에 따라 보상하여야 한다.

□ 기타 보안과 관련되는 사항을 감독관이 요구하는 경우에는 이에 따라야 한다.

□ 계약의 해지 및 위반사항의 조치

□ 발주처의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행하거나 계약조건을 위반할 때, 계약 전부 및 일부를 해제 또는 해지 할 수 있음

□	기타 명시되지 않은 사항이 발생 시, 제주관광공사와 협의하여 추진함

4		과업보고 · 성과품 ‧ 사후관리

□ 과업보고

1. 착수보고회

○ 과업수행자는 계약일로부터 10일 이내에 착수계 및 과업수행계획서 등 관련 서류를 제출하고, 착수보고회를 실시하여 제주관광공사의 승인을 득한 후 사업을 추진하여야 함

○	과업수행계획서에는 과업의 수행방향, 과업내용, 세부추진일정, 과업 공정일정표(주별/월별), 과업수행 책임자를 포함한 분야별 기술진 투입인력 현황 등 제주관광공사가 제시한 과업내용이 포함되어야 함

※ 제출서류 : 착수계, 과업수행계획서, 공정일정표, 보안각서 등

2. 1차 보고회

○ 주민대상 의견수렴

- 전체적인 조형물 디자인 및 위치, 조성, 문화재 심의 등 관련 사항에 대해 주민의견수렴 필요

- 관련하여 2회 이상 마을주민 대상 의견수렴 회의 진행할 예정이며 구체적인 일정은 공사와 상의하여 진행해야함

○ 전문가 자문회의

- 필요시, 관련 전문가들을 활용한 자문 보고회 진행 할 계획

3. 디자인 컨셉 확정 보고회

○ 확정된 전체 테마거리공간 조성 시안을 통한 보고회 실시

- 문화재 심의를 위한 디자인 컨셉 확정 보고회이며, 관련해서 서귀포시 문화예술과(문화재청 담당과)수정사항이 있거나 협조할 사항이 있을 경우, 이를 반영하여 추가 보고가 진행될 수 있음

4. 수시보고 및 현장자문

○ 수시보고

- 필요시, 발주기관(과업지시자)의 요청에 따라 수시보고가 진행될 수 있음

○ 현장자문

- 설계도 및 디자인 컨셉 등에 부합되는 공사 진행여부를 점검하기 위해 전문 자문가를 통한 현장자문 및 현장점검 시행

5. 최종보고회

○ 과업수행자는 과업종료 전 7일 이내 사업추진의 전반적인 내용을 포함한 최종보고회를 실시하여야 함

○ 최종보고회 자료는 보고회 2일 전에 제출하여야 하며 보고는 반드시 과업책임자가 보고하여야 함

□ 과업 성과품

○ 최종보고서 20부(컬러)

○ 완료계, 완료검사원, 완료내역서

○ 설치물 디자인 시안 등

※ 문화재 심의에 필요한 기준에 따른 사항이 담긴 설계도 (규격, 재질, 색상 등)

○ 설치물별 가격 산출내역서, 원가계산서 등

○ CD 10EA(데이터 원본 및 사진자료 등 포함), 기타 제반자료 등

○ 청구 시 사후정산서 제출(선금을 지급받은 경우, 선금사용내역 제출)

○ 그 외 제주관광공사에서 요청하는 서류

□ 사후관리

○ 설치물 제작·시공이 설계도면과 상이하거나, 불량 또는 파손이 있는 경우 보완 및 보수하여야 함

○ 설치물 제작·시공 완료 후 대금 청구 시 하자이행보험증권을 첨부하여야 함

○	제작·시공 완료 후(완료계 제출 시점) 1년 동안 설치물 조성과 관련된 하자가 발생 시 무상 보수함

- 단 천재지변으로 인한 재해의 경우 예외